Regione Umbria
Giunta Regionale	
	
DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO	
Servizio Demanio, patrimonio, prevenzione, protezione e sicurezza

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 11246  DEL  30/10/2017

OGGETTO:  	C.I.G. Z3B1EEFA09. Affidamento diretto dei lavori di somma urgenza di messa in sicurezza dell’edificio “ex ospedale”, sito nel Comune di Città di Castello (PG) in via Oberdan, angolo via S.Caterina. Impegno di spesa € 43.736,36 sul capitolo 00400.  	

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Premesso:
•	che a seguito di segnalazione, effettuata con nota del 30 aprile 2017 dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Città di Castello (PG), lo stesso Comune, con propria nota P.E.C. del 26 maggio 2017, acquisita al protocollo regionale n. 19746 del 29 maggio 2017, ha richiesto al Servizio Demanio, patrimonio, prevenzione, protezione e sicurezza della Regione Umbria, l’effettuazione di una verifica di stabilità dei paramenti murari e degli sporti di gronda dell’edificio “ex ospedale”, ubicato nel Comune di Città di Castello in via Oberdan, angolo via S.Caterina;  
•	che in data 1 giugno 2017 i tecnici incaricati dal Servizio Demanio, patrimonio, prevenzione, protezione e sicurezza della Regione Umbria, si sono recati nel Comune di Città di Castello (PG), al fine di verificare le condizioni dell’immobile di proprietà regionale denominato “ex ospedale”, sito in via Oberdan, angolo via S.Caterina;
•	che dal sopralluogo effettuato presso lo stesso immobile è stata accertata l’esistenza delle seguenti criticità:
•	sporto di gronda sovrastante la facciata dell’edificio perpendicolare a via S.Caterina notevolmente danneggiato e sconnesso;
•	scivolamento di alcuni coppi a ridosso degli sporti di gronda su piccoli tratti di copertura sovrastanti via S.Caterina e via Oberdan;
•	tratti di cornicioni marcapiano in pietra serena, posti sui paramenti murari prospicienti via S.Caterina e via Oberdan, visibilmente danneggiati;
•	evidenti distacchi di intonaci dai paramenti murari prospicienti via Oberdan e via S.Caterina;
•	danneggiamento delle lastre in plexiglass posizionate sul cancello scorrevole di accesso alla corte interna;
•	che le criticità sopra descritte hanno determinato uno stato di pregiudizio e di pericolo per la pubblica incolumità; 
•	che le medesime suddette criticità sono state ritenute tali da determinare l’esecuzione, per somma urgenza, dei necessari lavori finalizzati alla rimozione del pericolo;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”, così come modificato ed integrato con D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e con legge 21 giugno 2017, n.96;
Visto in particolare l’art. 163, commi 1 e 2 del suddetto D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, e che l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici, individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente;
Dato atto che i tecnici del Servizio Demanio, patrimonio, prevenzione, protezione e sicurezza della Regione Umbria, geom. Danilo Manciucca e geom. Alberto Paci, in data 5 giugno 2017, hanno redatto il verbale di somma urgenza ai sensi del citato art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), dal quale si evince che, al fine di rimuovere la situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità, è necessario intervenire con somma urgenza e provvedere ad effettuare i seguenti lavori: 
-	transennamento degli interi tratti perimetrali dell’edificio lungo via Oberdan e via S.Caterina;
-	riparazione dello sporto di gronda sovrastante la facciata interna dell’edificio perpendicolare a via S.Caterina;
-	revisione generale dell’intero manto di copertura e messa in sicurezza dei coppi pericolanti scivolati a ridosso degli sporti di gronda;
-	revisione generale dei paramenti murari prospicienti via Oberdan e via S.Caterina, e conseguente rimozione, ove necessario, delle parti ammalorate e pericolanti dei cornicioni marcapiano e degli intonaci distaccati;
-	sostituzione, in corrispondenza del cancello scorrevole ubicato lungo via S.Caterina, delle lastre in plexiglass danneggiate con lastre in ferro saldato od inferriate;  
Considerato che, mediante la consultazione online dell’elenco regionale delle imprese della Regione Umbria di cui all’art. 26 della L.R. n. 3 del 21 gennaio 2010, è stato individuato, quale operatore economico per l’esecuzione dei suddetti interventi di somma urgenza, l’impresa “La Due BC” s.r.l., con sede in Città di Castello (PG) –  via Elio Vittorini n. 19/B (c.f. e p.i. 01198310540), la quale, interpellata per le vie brevi, si è resa disponibile ad eseguire gli stessi interventi in tempi rapidi, stante l’urgenza di rimuovere le situazioni di pericolo sopradescritte;
Dato atto che il Servizio Demanio, patrimonio, prevenzione, protezione e sicurezza della Regione Umbria, in qualità di stazione appaltante, con nota P.E.C. prot. n. 122902 del 5 giugno 2017, ha formalmente richiesto alla suddetta impresa “La Due BC” s.r.l. la redazione e l’invio del preventivo di spesa, necessario per poter procedere all’affidamento dei lavori di somma urgenza di messa in sicurezza dell’edificio “ex ospedale”, sito nel Comune di Città di Castello (PG) in via Oberdan, angolo via S.Caterina;
Visto il preventivo di spesa del 6 giugno 2017, dell’importo di € 8.092,38 oltre I.V.A. ai sensi di legge, presentato dall’impresa “La Due BC” s.r.l. con propria nota P.E.C. prot. n. 11 del 6 giugno 2017, così come acquisito in pari data al protocollo della Regione Umbria con n. 124280;
Ritenuta la spesa complessiva di cui sopra, pari ad € 8.092,38, oltre I.V.A. al 22% per € 1.780,32, per un totale ammontante pertanto ad € 9.872,70, congrua ed adeguatamente rapportata alla consistenza dei lavori da eseguire;
Vista la nota P.E.C. prot. n. 127569 del 9 giugno 2017, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato 2), inviata dal Dirigente del Servizio Demanio, patrimonio, prevenzione, protezione e sicurezza, nonché Responsabile Unico del Procedimento,  all’impresa “La Due BC s.r.l.”, con la quale:
•	è stato preso atto del verbale di somma urgenza, redatto in data 5 giugno 2017 ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
•	è stato preso atto del preventivo di spesa del 6 giugno 2017, dell’importo di € 8.092,38 oltre I.V.A. ai sensi di legge, trasmesso dalla medesima impresa “La Due BC” s.r.l. in pari data ed acquisito al protocollo regionale n. 124280;
•	è stata disposta l’immediata esecuzione dei lavori di messa in sicurezza in oggetto indicati, così come descritti nel verbale di somma urgenza del 5 giugno 2017 e nel preventivo di spesa del 6 giugno 2017, stante l’urgente e motivata necessità di realizzazione degli stessi, tale da non consentirne un differimento del relativo inizio; 
•	è stata invitata l’impresa “La Due BC” s.r.l. a voler dare avvio, sin dal giorno 13 giugno 2017, come concordato per le vie brevi, ai lavori di messa in sicurezza di cui all’oggetto, nelle more dell’espletamento delle procedure di affidamento, in via definitiva, a favore della stessa impresa;
Viste le linee guida n. 4 attuative del nuovo Codice dei contratti pubblici, emanate dall’A.N.A.C. ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, le indagini di mercato e la formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
Rilevato che le suddette linee guida dispongono, per quanto riguarda l’affidamento diretto e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, che i criteri di selezione degli operatori economici sono connessi al possesso, da parte degli stessi, dei requisiti minimi di:
-	carattere generale, desumibili dall’art. 80 del codice di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
-	idoneità professionale, necessari allo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
-	capacità economica e finanziaria;
-	capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo del contratto;
Atteso che con nota P.E.C. prot. n. 130401 del 14 giugno 2017, il Servizio Demanio, patrimonio, prevenzione, protezione e sicurezza della Regione Umbria, in qualità di stazione appaltante, ha richiesto all’impresa “La Due BC” s.r.l. le previste autodichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità e capacità tecnica e professionale, nonché di capacità economica e finanziaria; 
Visto che con propria P.E.C. del 14 giugno 2017, acquisita al protocollo regionale n. 131304 del 15 giugno 2017, l’impresa “La Due BC s.r.l.” ha prodotto tutte le necessarie  autodichiarazioni, fornendo i documenti e le informazioni necessari alle verifiche di che trattasi; 
Dato atto che è stata acquisita la documentazione di rito e verificato, in capo all’impresa “La Due BC s.r.l.”, il possesso dei requisiti necessari all’affidamento del lavoro in oggetto, ed in particolare:
-	in luogo dell’autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine tecnico ed organizzativo di cui all’art. 90 ex D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è stata prodotta apposita attestazione S.O.A. n. 10325/41/01 del 14 marzo 2016, per le categorie di opere OG1, OG2 ed OG3;
-	dall’analisi dell’autocertificazione di cui all’allegato 3, resa ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, è stato verificato il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
-	con le opportune verifiche, effettuate presso gli enti e le amministrazioni competenti, è stato  verificato il possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
a)	in ordine alla verifica della regolarità contributiva, è stato acquisito d’ufficio il D.U.R.C. prot. n. INAIL_7996820, che è risultato regolare;
b)	in ordine alla verifica di eventuali procedimenti fallimentari in corso, dall’esame delle  visure camerali allo scopo acquisite d’ufficio, si è accertato che a carico dell’impresa  “La Due BC s.r.l.” non risultano pendenti procedure concorsuali;
c)	in ordine alla verifica su procedimenti giuridici accertati, i Certificati del Casellario Giudiziale, richiesti con nota P.E.C. prot. n. 150527 del 10 luglio 2017 a nome del legale rappresentante e dei direttori tecnici dell’impresa “La Due BC s.r.l.”, emessi dalla Procura della Repubblica con n. 2655327/2017/R, n. 2655328/2017/R e n. 2655329/2017/R dell’11 luglio 2017, hanno attestato che nella banca dati del Casellario giudiziale risulta nulla;  
d)	in data 4 settembre 2017 è stato effettuato l’accesso alle annotazioni riservate sul sito dell’A.N.A.C., dal quale risulta che l’impresa “La Due BC s.r.l.” non è incorsa nelle violazioni di cui al comma 5, lettere a), c), f), g) ed l) dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
e)	a seguito di richiesta inoltrata tramite P.E.C. in data 6 luglio 2017, prot. n. 148076, relativamente alla verifica della regolarità rispetto agli obblighi di pagamento di imposte e tasse, con nota del 12 luglio 2017, acquisita tramite P.E.C. al protocollo regionale n. 156216 del 18 luglio 2017, è stato attestato da parte dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Perugia - Ufficio territoriale di Città di Castello, che a carico dell’impresa “La Due BC s.r.l.”, non risultano violazioni definitivamente  accertate;
f)	in ordine alla certificazione inerente l’Anagrafe delle sanzioni amministrative derivanti da reato di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a seguito di richiesta formulata con nota P.E.C. prot. n. 150588 del 10 luglio 2017, con certificato n. 513/2017/R del 13 luglio 2017, acquisito al protocollo regionale n. 155047 del 17 luglio 2017, è stato attestato che nell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato risulta nulla; 
Considerato che, ai fini degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni:   
-	l’impresa “La Due BC s.r.l.”, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, ha dichiarato di assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla predetta legge, comunicando altresì gli estremi del conto corrente dedicato, intestato alla stessa impresa, in essere presso “Banca Popolare di Spoleto” – Agenzia di Riosecco (IBAN IT58V0570421601000000001468), nonché le generalità delle persone delegate ad operarvi;
-	è stato conseguentemente acquisito il C.I.G. relativo all’affidamento in oggetto, che risulta essere Z3B1EEFA09;
Preso atto che in data 16 giugno 2017 il R.U.P. arch. Umberto Piccioni ed il tecnico geom. Danilo Manciucca hanno redatto la perizia giustificativa ai sensi del comma 4 dell’art 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 3); 
Ritenuto pertanto, ai sensi del medesimo comma 4 dell’art. 163 del D. Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, di dover approvare i lavori indicati nel verbale di somma urgenza del 5 giugno 2017, tra l’altro già eseguiti dall’impresa “La Due BC s.r.l.”, con sede in Città di Castello (PG), via Elio Vittorini n. 19/B (c.f. e p.i. 01198310540), e di autorizzare il necessario impegno di spesa per l’importo complessivo € 9.872,70, che trova copertura finanziaria a carico del capitolo 00400 del corrente bilancio regionale;   
Atteso che l’oggetto, il contenuto e gli obblighi afferenti al lavoro di cui al presente affidamento, sono già disciplinati nel verbale di somma urgenza del 5 giugno 2017, nonché ulteriormente dettagliati nel preventivo acquisito al protocollo dell’Amministrazione regionale in data 6 giugno 2017, con il n. 124280;
Vista la nota P.E.C. del 23 giugno 2017, acquisita al protocollo regionale con n. 140189 del 27 giugno 2017, con la quale l’impresa “La Due BC s.r.l. ha comunicato l’ultimazione dei lavori in oggetto, avvenuta in data 23 giugno 2017;
Accertato dal tecnico geom. Danilo Manciucca, con verbale redatto in data 17 luglio 2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 4), che i lavori di somma urgenza, concernenti la messa in sicurezza dell’edificio “ex ospedale”, sito nel Comune di Città di Castello (PG) in via Oberdan, angolo via S.Caterina, sono stati regolarmente eseguiti dall’impresa “La Due BC s.r.l.”;
Considerato:
-	che, soltanto nella fase esecutiva dei lavori, e, nella fattispecie, durante la  rimozione delle parti pericolanti sulla sommità della facciata dell’edificio prospiciente via Oberdan, si è potuto, da breve distanza, constatare l’evidente stato di danneggiamento della torre campanaria e della relativa balaustra in elementi lapidei, oltre che la precarietà della struttura di sostegno delle campane;
-	che tale stato di danneggiamento è imputabile sia al mancato utilizzo dell’immobile che ad un peggioramento generale delle sue condizioni statiche, dovuto alla crisi sismica che ha colpito l’Italia Centrale a partire dal 24 agosto 2016;
-	che, per tali motivazioni, con nota P.E.C. prot. n. 157420 del 19 luglio 2017, è stato richiesto al Servizio Ricostruzione post sisma ed emergenze, un sopralluogo urgente al fine di verificare le condizioni di stabilità dell’immobile denominato “ex ospedale”;
Dato atto che, sulla base della suddetta richiesta prot. n. 157420/2017, in data 2 agosto 2017 è stato effettuato, da parte della squadra dei tecnici Aedes RUP029, apposito sopralluogo al fine di verificare lo stato di danneggiamento nonché le condizioni di stabilità dell’edificio denominato “ex ospedale S.Florido”, ubicato nel Comune di Città di Castello in largo Monsignor Muzi n. 5 (già via Oberdan), angolo via S.Caterina;
Visto l’esito del sopralluogo del 2 agosto 2017, così come si evince dalla scheda Aedes n. 1 redatta in pari data, dalla quale risulta l’inagibilità dell’edificio “ex ospedale S.Florido”, dovuta anche all’aggravamento determinato dagli eventi sismici che hanno colpito l’Italia Centrale a partire dal 2016;
Vista l’Ordinanza n. 165 del 7 agosto 2017, acquisita al protocollo regionale in data 8 agosto 2017 al n. 170837, con la quale, susseguentemente al suddetto sopralluogo del 2 agosto 2017, il Sindaco del Comune di Città di Castello:
a)	ha dichiarato l’inagibilità totale dell’immobile “ex ospedale S.Florido di Città di Castello”;
b)	ha ordinato alla Regione Umbria:
1.	la tempestiva effettuazione di una approfondita verifica dei portali delle finestre prospicienti largo Monsignor Muzi, nonché della torre campanaria, al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità;
2.	il mantenimento del transennamento lungo la facciata prospiciente largo Monsignor Muzi, fintanto che non saranno effettuate le opportune verifiche dei portali delle finestre e della torre campanaria;
3.	la presentazione, al Comune di Città di Castello, di apposita relazione, attestante, in conseguenza delle suddette verifiche, ovvero di eventuali interventi posti in essere, l’eliminazione del potenziale stato di pericolo; 
 Considerato che:
•	in data 9 agosto 2017 i tecnici incaricati del Servizio Demanio, patrimonio, prevenzione, protezione e sicurezza della Regione Umbria, hanno effettuato un sopralluogo presso l’immobile di che trattasi, evidenziando la necessità di dover procedere urgentemente all’esecuzione dei seguenti interventi di messa in sicurezza:
-	sistemazione di alcuni portali delle finestre che fronteggiano Largo Monsignor Muzi (denominata via Oberdan nel precedente appalto i cui lavori sono stati ultimati il 23 giugno 2017), tramite posizionamento di elementi che ne impediscano il ribaltamento lungo la via;
-	puntellatura, tramite realizzazione di centine in legno, della cella campanaria e, possibilmente, della struttura in legno che sostiene le campane,
ritenendo gli stessi indispensabili per la tutela della pubblica e privata incolumità;
•	in data 10 agosto 2017 è stata redatta la relazione di sopralluogo dai suddetti tecnici del Servizio Demanio, patrimonio, prevenzione, protezione e sicurezza della Regione Umbria, dalla quale si evince lo stato di fatto dell’immobile regionale denominato “ex ospedale S.Florido”, sito nel Comune di Città di Castello (PG), le cui sopradescritte criticità, concernenti i portali delle finestre e la torre campanaria, sono imputabili alla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016;
•	in data 10 agosto 2017 gli stessi tecnici hanno altresì redatto apposito verbale con il quale è stato stabilito di intervenire con somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
•	previa consultazione online, dell’elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore ad un milione di euro, effettuata in data 16 agosto 2017, è stata individuata allo scopo l’impresa “La Due BC s.r.l.” (c.f. e p.i. 01198310540), avente sede legale in Città di Castello (PG) via Elio Vittorini n. 19/B, unica impresa, alla stessa data, risultata disponibile tra quelle interpellate, ed esecutrice, tra l’altro, degli interventi di messa in sicurezza realizzati nel mese di giugno u.s. di cui al verbale di somma urgenza del 5 giugno 2017;
Dato atto che:
•	interpellata per le vie brevi, in data 24 agosto 2017 la suddetta impresa “La Due BC s.r.l.” ha formulato apposita offerta economica per un importo pari ad € 31.018,93, di cui € 15.532,53 per lavori ed € 15.486,40 per costi della sicurezza, oltre I.V.A. al 22% ai sensi di legge;
•	l’importo della spesa, occorrente per l’esecuzione dei lavori in oggetto, è stato  rinegoziato per le vie brevi con la suddetta impresa “La Due BC s.r.l.”, la quale ha offerto uno sconto del 21% sull’importo dei lavori a misura, per cui la spesa complessiva viene così a rideterminarsi:
a)	Importo dei lavori a misura come da computo metrico estimativo	€ 15.532,53
- sconto del 21% offerto sui lavori a misura ………………………	€   3.261,83 	
a1) lavori al netto dello sconto offerto del 21% ………………………	€ 12.270,70
b)	  + costi della sicurezza ………………………………………………	€ 15.486,40
Totale lavori comprensivi dei costi della sicurezza ……………….	€ 27.757,10
+ I.V.A. al 22% ……………………………………………………….	€   6.106,56
COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO ………………….	€ 33.863,66
Ritenuta la spesa complessiva di cui sopra, pari ad € 27.757,10, oltre I.V.A. al 22% per € 6.106,56, per un totale ammontante pertanto ad € 33.863,66, congrua ed adeguatamente rapportata alla consistenza dei lavori da eseguire;
Vista la nota P.E.C. prot. n. 178405 del 25 agosto 2017, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato 7), inviata dal Dirigente del Servizio Demanio, patrimonio, prevenzione, protezione e sicurezza, nonché Responsabile Unico del Procedimento, all’impresa “La Due BC s.r.l.”, con la quale:
-	è stato preso atto del verbale di sopralluogo e del verbale di somma urgenza, redatti in data 10 agosto 2017 ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
-	è stato preso atto della disponibilità, manifestata dall’impresa “La Due BC s.r.l.” (c.f. e p.i. 01198310540), avente sede legale in Città di Castello (PG) via Elio Vittorini n. 19/B, a procedere all’esecuzione dei suddetti ulteriori lavori di somma urgenza;
-	è stato preso atto del preventivo di spesa del 24 agosto 2017, dell’importo di € 31.018,93 oltre I.V.A. ai sensi di legge, trasmesso dalla medesima impresa “La Due BC” s.r.l., così come rinegoziato per le vie brevi mediante lo sconto del 21% sull’importo dei lavori a misura, offerto dalla stessa, che ha rideterminato il costo complessivo dell’intervento in € 33.863,66, di cui € 27.757,10 per lavori a misura comprensivi dei costi della sicurezza, ed € 6.106,56 per I.V.A. al 22%;
-	è stata disposta l’immediata esecuzione dei lavori di messa in sicurezza in oggetto indicati, così come descritti nel verbale di somma urgenza del 10 agosto 2017 e nel preventivo di spesa del 24 agosto 2017, stante l’urgente e motivata necessità di realizzazione degli stessi, tale da non consentirne un differimento del relativo inizio; 
-	è stata invitata l’impresa “La Due BC” s.r.l. a voler dare avvio, sin dal giorno 28 agosto 2017, come concordato per le vie brevi, ai lavori di messa in sicurezza di cui all’oggetto, nelle more dell’espletamento delle procedure di affidamento, in via definitiva, a favore della stessa impresa;
Ritenuto, per quanto attiene gli ulteriori lavori di messa in sicurezza dell’immobile denominato “ex ospedale”, di cui al verbale di somma urgenza del 10 agosto 2017, provvisoriamente affidati alla medesima impresa “La Due BC s.r.l.” di Città di Castello (c.f. e p.i. 01198310540), già esecutrice del primo intervento di somma urgenza sullo stesso immobile di cui al verbale del 5 giugno 2017, che lo stesso affidamento, rispetto al principio di rotazione sancito dall’art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, riveste carattere eccezionale, in quanto:
-	è scaturito dalla effettiva mancanza di alternative, dovuta al particolare momento in cui è avvenuta la consultazione online dell’elenco regionale delle imprese, ovvero il 16 agosto 2017, giorno feriale ricadente nel pieno periodo in cui, in genere, le imprese edili risultano chiuse per le ferie estive;
-	è comunque elevato il grado di soddisfazione maturato a seguito dell’esecuzione dei precedenti lavori di messa in sicurezza, effettuati a regola d’arte e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
-	è comunque da ritenere competitivo il prezzo offerto per la realizzazione degli ulteriori lavori di messa in sicurezza, essendo lo stesso scaturito dall’applicazione dei prezzi unitari desunti dal prezzario della Regione Umbria – Edizione 2016, ribassati dallo sconto del 21% offerto dalla medesima impresa “La Due BC s.r.l.”,
il tutto conformemente ai principi di cui al punto 3.3.2 delle Linee Guida n. 4, attuative del D.Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con propria deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016;   
Considerato, per quanto attiene alle previste autodichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità e capacità tecnica e professionale, di capacità economica e finanziaria, nonché la tracciabilità dei flussi finanziari, oltre che alla documentazione afferente le risultanze degli accertamenti e verifiche di legge:
-	che la stessa è stata acquisita durante la fase esecutiva del precedente affidamento provvisorio dei lavori di somma urgenza di cui al verbale del 5 giugno 2017, effettuato a favore della medesima impresa “La Due BC s.r.l.” con la già citata nota P.E.C. prot. n. 127569 del 9 giugno 2017 ;
-	che la stessa è conservata agli atti del Servizio Demanio, patrimonio, prevenzione, protezione e sicurezza della Regione Umbria, e che risulta in corso di validità;
Preso atto che in data 1 settembre 2017 i tecnici ing. Tino Gaggio e per.agr. Danilo Cornicchia hanno redatto la perizia giustificativa degli ulteriori lavori di messa in sicurezza di cui al verbale di somma urgenza del 10 agosto 2017, ai sensi del comma 4 dell’art 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 8); 
Ritenuto pertanto, ai sensi del medesimo comma 4 dell’art. 163 del D. Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, di dover approvare gli ulteriori lavori indicati nel verbale di somma urgenza del 10 agosto 2017, tra l’altro già eseguiti dall’impresa “La Due BC s.r.l.”, con sede in Città di Castello (PG), via Elio Vittorini n. 19/B (c.f. e p.i. 01198310540), e di autorizzare il necessario impegno di spesa per l’importo complessivo € 33.863,66, che trova copertura finanziaria a carico del capitolo 00400 del corrente bilancio regionale; 
Atteso che l’oggetto, il contenuto e gli obblighi afferenti agli ulteriori lavori di messa in sicurezza di cui al presente affidamento, sono già disciplinati nel verbale di somma urgenza del 10 agosto 2017, nonché ulteriormente dettagliati nel preventivo di spesa prodotto ed inviato dall’impresa “La Due BC s.r.l.” in data 24 agosto 2017;
Vista la nota P.E.C. del 19 settembre 2017, acquisita in pari data al protocollo regionale n. 195910, con la quale l’impresa “La Due BC s.r.l.” ha comunicato che i lavori, affidati con nota P.E.C. prot. n. 178405 del 25 agosto 2017, hanno avuto inizio in data 29 agosto 2017; 
Vista la nota P.E.C. del 25 settembre 2017, acquisita al protocollo regionale con n. 201900 del 26 settembre 2017, con la quale l’impresa “La Due BC s.r.l.” ha comunicato l’ultimazione degli ulteriori lavori di cui al verbale di somma urgenza del 10 agosto 2017, avvenuta in data 25 settembre 2017;
Accertato dai tecnici ing. Tino Gaggio e geom. Emidio Sulpizi, con verbale redatto in data 9 ottobre 2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 9), che gli ulteriori lavori di somma urgenza, concernenti la messa in sicurezza dei portali delle finestre e della torre campanaria dell’edificio “ex ospedale”, sito nel Comune di Città di Castello (PG) in Largo Monsignor Muzi (già via Oberdan), angolo via S.Caterina, sono stati regolarmente eseguiti dall’impresa “La Due BC s.r.l.”;
Ritenuto, trattandosi di lavori di somma urgenza eseguiti sullo stesso immobile, ancorché in tempi diversi, dalla stessa impresa “La Due BC s.r.l.” di Città di Castello, di dover accorpare i due preventivi di spesa prodotti dalla stessa impresa rispettivamente:
•	in data 6 giugno 2017, per i lavori di somma urgenza provvisoriamente affidati con nota P.E.C. prot. n. 127569 del 9 giugno 2017 di cui al verbale del 5 giugno 2017, concernenti la messa in sicurezza dei paramenti murari dell’edificio “ex ospedale”;
•	in data 24 agosto 2017, per i lavori di somma urgenza provvisoriamente affidati con nota P.E.C. prot. n. 178405 del 25 agosto 2017 di cui al verbale del 10 agosto 2017, concernenti la messa in sicurezza della torre campanaria e dei portali delle finestre dell’edificio “ex ospedale”,
così come segue:
	1° INTERVENTO (Verbale 05/06/2017)	2° INTERVENTO (Verbale 10/08/2017)	TOTALE	
Importo netto lavori	 €               8.092,38 	 €             27.757,10 	 €             35.849,48 	
I.V.A. 22% sui lavori	 €               1.780,32 	 €               6.106,56 	 €               7.886,88 	
				
Sommano	 €               9.872,70 	 €             33.863,66 	 €             43.736,36 	
				
anche al fine di addivenire all’assunzione di un unico impegno di spesa, sul capitolo 00400 del bilancio regionale, tenuto conto che gli interventi sono stati entrambi ultimati dall’impresa “La Due BC s.r.l.”; 
Dato atto, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, che l’impegno di spesa di che trattasi viene assunto soltanto con il presente atto anziché al sorgere dell’obbligazione, in quanto, nella fattispecie:
-	trattasi di lavori di somma urgenza previsti dell’art. 163 del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016, eseguiti senza preventiva redazione di un progetto esecutivo;
-	i lavori di cui al sopraindicato 2° intervento, di cui al verbale del 10 agosto 2017 (che hanno tra l’altro riguardato la torre campanaria, posta ad una altezza di oltre 20 metri, inaccessibile dall’interno e raggiungibile soltanto con adeguati mezzi di sicurezza), avrebbero potuto, potenzialmente, per tali motivi, subire ulteriori variazioni durante la fase esecutiva (come già verificatosi in corso d’opera durante la realizzazione del 1° intervento di cui al verbale del 5 giugno 2017) con conseguente imprevisto aumento del relativo importo e, di conseguenza dell’impegno di spesa;
-	soltanto in data 4 settembre 2017 è pervenuta alla stazione appaltante l’ultima verifica di legge nei confronti dell’impresa esecutrice “La Due BC s.r.l.”, prevista, tra l’altro dal comma 7 del suddetto art. 163 del Codice dei contratti;
-	i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 25 settembre 2017, ed, in data 2 ottobre 2017 è pervenuta alla stazione appaltante la relazione dell’impresa sugli interventi eseguiti, sulla base della quale, la stessa stazione appaltante ha tempestivamente proceduto (in data 6 ottobre 2017) alla effettuazione di apposito sopralluogo finalizzato all’accertamento della regolare esecuzione dei lavori, formalizzata con apposito verbale del 9 ottobre 2017;   
-	pertanto soltanto in data 9 ottobre 2017, dopo l’effettuazione delle necessarie verifiche, è stata acquisita la certezza inerente la definitiva quantificazione dell’impegno complessivo di spesa di € 43.736,36, di cui € 35.849,48 per lavori ed € 7.886,88 per I.V.A. al 22%;
-	le relative perizie giustificative, previste dal comma 4 del sopracitato art. 163 del Codice dei contratti, sono state redatte dalla stazione appaltante entro i termini stabiliti dallo stesso articolo;
-	trattandosi di lavori di importo superiori ad € 20.000,00, è stata nel frattempo ravvisata la necessità di dover estendere la nomina del R.U.P. all’arch. Umberto Piccioni (già nominato tale con determinazione direttoriale n. 1138 dell’8 febbraio 2017 per tutti i lavori su immobili di proprietà regionale di importo inferiore o pari ad € 20.000,00), formalizzata, da ultimo, con determinazione direttoriale n. 10864 del 20 ottobre 2017;
Atteso che:
-	è stato acquisito il C.I.G. relativo agli affidamenti in oggetto, che risulta essere Z3B1EEFA09;
-	con determinazione direttoriale n. 10864 del 20 ottobre 2017, l’arch. Umberto Piccioni, dirigente del Servizio Demanio, patrimonio, prevenzione, protezione e sicurezza della Regione Umbria, è stato nominato responsabile Unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, art. 15 della L.R. n. 3/2010 ed art. 3 del Regolamento regionale approvato con D.G.R. n. 999/2015, per i lavori di somma urgenza di messa in sicurezza dell’edificio “ex ospedale”, sito nel Comune di Città di Castello (PG) in largo Monsognor Muzi, angolo via S.Caterina (C.I.G. Z3B1EEFA09); 
Ritenuto infine, trattandosi, nella fattispecie, di affidamento di lavori di messa in sicurezza conseguenti ad uno stato di danneggiamento dell’immobile in oggetto, aggravatosi a seguito della crisi sismica che ha colpito l’Italia Centrale a partire dal 24 agosto 2016, così come risulta dall’Ordinanza Sindacale del Comune di Città di Castello n. 165 del 7 agosto 2017, di dover successivamente richiedere al Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile – Ufficio Speciale Ricostruzione, il rimborso della somma complessiva di € 43.736,36, non appena si sarà provveduto a liquidare l’Impresa “La Due BC s.r.l.” per l’esecuzione dei lavori medesimi;       
Dato atto infine:
•	che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, trattandosi, nella fattispecie, di procedura di affidamento di appalto pubblico di lavori, il presente atto sarà pubblicato ed aggiornato sul profilo del committente della Regione Umbria, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;   
•	che gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 saranno assolti con la pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 23 e 37 del citato decreto;
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista  L.R. 28/12/2016, n. 17 “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2017-2019”;
Vista la legge regionale 28 luglio 2017, n. 11 recante “Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”;
Vista la d.g.r. 28 luglio 2017 n. 867 recante: “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 assestato, di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii”;
Vista la d.g.r. 28 luglio 2017 n. 868 recante “Approvazione Bilancio finanziario gestionale di previsione 2017-2019 assestato, di cui all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Vista la d.g.r.  21 dicembre 2015 n. 1541 avente ad oggetto “D.lgs. 118/2011- Adeguamento del sistema di rilevazioni della contabilità economico- patrimoniale ed analitica”;
Vista la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109  che ha attivato  la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della l.r. n. 13/2000;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente
D E T E R M I N A

1.	di dare atto che con nota P.E.C. prot. n. 127569 del 9 giugno 2017 (Allegato 2), si è proceduto, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, per le motivazioni espresse nella stessa tali da non consentire un differimento dell'esecuzione degli stessi, a disporre l'immediata esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle facciate e degli sporti di gronda dell’immobile “ex ospedale” di Città di Castello, così come descritti nel verbale di somma urgenza del 5 giugno 2017 (Allegato 1) nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento, in via definitiva, a favore dell’impresa “La Due BC s.r.l.”, con sede in Città di Castello (PG) –  via Elio Vittorini n. 19/B (c.f. e p.i. 01198310540);
2.	di prendere atto della perizia giustificativa redatta dal tecnico geom. Danilo Manciucca in data 16 giugno 2017 (Allegato 3), relativa all’esecuzione dei lavori di somma urgenza ex art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti la messa in sicurezza delle facciate e degli sporti di gronda dell’immobile di che trattasi ;
3.	di approvare, ai sensi del comma 4 dell’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, i lavori indicati nel verbale di somma urgenza del 5 giugno 2017 (Allegato 1), così come già eseguiti dall’impresa “La Due BC s.r.l.” per un ammontare di € 8.092,38 oltre I.V.A. al 22% di € 1.780,32, e di autorizzare il necessario impegno di spesa per l’importo complessivo di € 9.872,70, che trova copertura finanziaria a carico del capitolo 00400 del corrente bilancio regionale;
4.	di prendere atto del verbale, redatto dal geom. Danilo Manciucca in data 17 luglio 2017 (Allegato 4) in cui si accerta che i lavori di messa in sicurezza delle facciate e degli sporti di gronda, così come autorizzati con nota P.E.C. prot. n. 127569 del 9 giugno 2017 (Allegato 2) sono stati regolarmente eseguiti dall’impresa “La Due BC s.r.l.”;
5.	di prendere atto dell’ordinanza n. 165, emessa dal Sindaco del Comune di Città di Castello in data 7 agosto 2017 (Allegato 5), dalla quale si evince, tra quant’altro:
a)	l’inagibilità dell’edificio “ex ospedale”, dovuta anche all’aggravamento conseguente gli eventi sismici del 2016 che hanno colpito l’Italia Centrale;
b)	la necessità di dover tempestivamente effettuare una verifica delle condizioni di stabilità della torre campanaria e di alcuni portali di finestre prospicienti largo Monsignor Muzi, al fine di scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità; 
6.	di dare atto che con nota P.E.C. prot. n. 178405 del 25 agosto 2017 (Allegato 7), si è proceduto, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, per le motivazioni espresse nella stessa tali da non consentire un differimento dell'esecuzione degli stessi, a disporre l'immediata esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della torre campanaria e dei portali delle finestre dell’immobile “ex ospedale” di Città di Castello, così come descritti nel verbale di somma urgenza del 10 agosto 2017 (Allegato 6) nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento, in via definitiva, a favore dell’impresa “La Due BC s.r.l.”, con sede in Città di Castello (PG) –  via Elio Vittorini n. 19/B (c.f. e p.i. 01198310540);
7.	di prendere atto della perizia giustificativa, redatta in data 1 settembre 2017 dai tecnici ing. Tino Gaggio e per.agr. Danilo Cornicchia (Allegato 8), relativa all’esecuzione dei lavori di somma urgenza, ex art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti la messa in sicurezza della torre campanaria e dei portali delle finestre dell’immobile di che trattasi;
8.	di approvare, ai sensi del comma 4 dell’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, i lavori indicati nel verbale di somma urgenza del 10 agosto 2017 (Allegato 6), così come già eseguiti dall’impresa “La Due BC s.r.l.”, per un ammontare di € 27.757,10 oltre I.V.A. al 22% di € 6.106,56, e di autorizzare il necessario impegno di spesa per l’importo complessivo di € 33.863,66, che trova copertura finanziaria a carico del capitolo 00400 del corrente bilancio regionale;
9.	di prendere atto del verbale, redatto in data 9 ottobre 2017 dai tecnici ing. Tino Gaggio e geom. Emidio Sulpizi (Allegato 9) in cui si accerta che i lavori di messa in sicurezza della torre campanaria e dei portali delle finestre, così come autorizzati con nota P.E.C. prot. n. 178405 del 25 agosto 2017 (Allegato 7) sono stati regolarmente eseguiti dall’impresa “La Due BC s.r.l.”;
10.	di prendere atto dell’esito positivo in ordine alle verifiche eseguite ai sensi del comma 7 dell’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 dello stesso D. Lgs. n. 50/2016, dei requisiti tecnico-organizzativi ai sensi dell’art. 90 ex D.P.R. n. 207/2010 e dei requisiti di ordine tecnico professionale di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2 del D.Lgs. n. 81/2008, da parte dell’impresa “La Due BC s.r.l.” con sede in Città di Castello (PG) –  via Elio Vittorini n. 19/B (c.f. e p.i. 01198310540);
11.	di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, all’affidamento, in via definitiva, dei lavori di somma urgenza di messa in sicurezza dell’immobile denominato “ex ospedale”, sito nel Comune di Città di Castello (PG), largo Monsignor Muzi (già via Oberdan), angolo via S.Caterina, all’impresa“ La Due BC s.r.l.” con sede in Città di Castello (PG) –  via Elio Vittorini n. 19/B (c.f. e p.i. 01198310540), per un importo complessivo netto dei lavori, comprensivo dei costi per la sicurezza, pari ad € 35.849,48 oltre I.V.A. al 22% di € 7.886,88, per un totale ammontante pertanto ad € 43.736,36, così come scaturito dal seguente quadro economico:
	1° INTERVENTO (Verbale 05/06/2017)	2° INTERVENTO (Verbale 10/08/2017)	TOTALE	
Importo netto lavori	 €               8.092,38 	 €             27.757,10 	 €             35.849,48 	
I.V.A. 22% sui lavori	 €               1.780,32 	 €               6.106,56 	 €               7.886,88 	
				
Sommano	 €               9.872,70 	 €             33.863,66 	 €             43.736,36 	
12.	di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva: 
esercizio di esigibilità	Importo esigibile	
2017	€ 43.736,36	
TOTALE	€ 43.736,36	
13.	di impegnare e procedere alla relativa registrazione, ai sensi dell’articolo 56 del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, la somma complessiva di € 43.736,36 a favore dei seguenti soggetti creditori:
•	quanto ad € 35.849,48 a favore del soggetto creditore “Impresa La Due BC s.r.l.” con sede in Città di Castello (PG) –  via Elio Vittorini n. 19/B (c.f. e p.i. 01198310540);
•	quanto ad € 7.886,88 a favore del soggetto creditore “Agenzia delle Entrate”;
14.	di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all’obbligazione giuridica passiva è data da risorse autonome per € 43.736,36;
15.	di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di € 43.736,36 in base alla seguente tabella:
Soggetto creditore	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Capitolo spesa	Importo imputato	Centro di costo	Codice Accertamento/ cronoprogam.
(*)	Capitolo entrata
(*)	
Impresa La Due BC s.r.l. - Città di Castello (PG)  via E. Vittorini n. 19/B (c.f. e p.i. 01198310540);	2017	2017	00400	€ 35.849,48	M010504			
Agenzia delle Entrate	2017	2017	00400	€   7.886,88	M010504			
TOTALE	€ 43.736,36		
16.	di precisare, ai fini dell’attribuzione del codice della transazione elementare, che il conto del piano dei conti finanziario al V livello al quale attribuire l’impegno è U.1.03.02.09.008;  
17.	di rinviare a successivi atti la liquidazione dell’importo complessivo di € 43.736,36, previa acquisizione della relativa fattura, da emettere in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55/2013 da parte dell’impresa “La Due BC s.r.l.”, fatti salvi gli accertamenti in merito alla regolarità contributiva nei confronti della medesima impresa;
18.	di richiedere al Servizio Organizzazione e sviluppo del Sistema di protezione civile – U.S.R., l’erogazione della somma di € 43.736,36, a titolo di rimborso anticipazione, trattandosi, nella fattispecie, di affidamento di lavori di messa in sicurezza conseguenti ad uno stato di danneggiamento dell’immobile in oggetto, aggravatosi a seguito della crisi sismica che ha colpito l’Italia Centrale a partire dal 24 agosto 2016;  
19.	di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, il presente provvedimento sarà pubblicato ed aggiornato sul profilo del committente della Regione Umbria, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;  
20.	di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
21.	di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 

Terni lì 26/10/2017	L’Istruttore
Danilo Manciucca	
	Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale	

Perugia lì 26/10/2017	Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Tino Gaggio	
	Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale	

 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta, si appone il visto in ordine alla regolarità contabile della proposta di atto in quanto la spesa trova copertura finanziaria al Capitolo del Bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2017-2019, che presenta la seguente situazione:

A)	Cronoprogramma

Beneficiario	Esercizio registr.ne	Esercizio imput.ne	Cap. 
spesa	Codice crono
programma	Importo
 imputato	Codice
 impegno	FPV	Codice Accertamento	Cap.
 entrata	
 	2017	2017	00400_S	0041706205	43.736,36	0011711283	 	 	 	

TOTALE	43.736,36	
di cui 2017	43.736,36	
di cui 2018	0	
di cui 2019 e successivi	0	

B1) Castelletto nel caso di impegno finanziato da FPV
Esercizio	Capitolo
spesa	Codice impegno/cronoprogramma	A) Stanziamento attuale	B)
Importo FPV	C)
Importo Impegni precedenti	D)=A)-B)-C)
Disponibilità di competenza	E)
Importo impegno imputato all’esercizio	F)
Importo FPV
da accantonare	G)= D)- E)-F)
Disponibilità residua	

B2) Castelletto nel caso di impegno non finanziato da FPV
Esercizio	Capitolo
spesa	Codice impegno	A) 
Stanziamento attuale	B)
 Importo FPV	C) 
Importo Impegni precedenti	D)=A)-B)-C)
Disponibilità di competenza	E) 
Importo impegno imputato all’esercizio	F)= D) E)
Disponibilità residua	
2017	00400_S	0011711283	678.656,15	6.013,74	540.995,96	131.646,45	43.736,36	87.910,09	

B3) Castelletto nel caso di impegno finanziato ai sensi dell’art. 20, titolo II del dlgs. n.118/2011:

CAP	VOCE	STANZIAMENTO ATTUALE	IMPEGNI PRECEDENTI	DISPONIBILITA’	IMPEGNO N.	IMPORTO	DISPONIBILITA’ RESIDUA	

L’istruttore di ragioneria: ALOISIO DONATELLA 

Perugia lì 30/10/2017	Il Dirigente del Servizio Ragioneria

Dr. Amato Carloni
	
	Visto apposto con firma elettronica avanzata ai sensi dell’art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale	

Perugia lì 30/10/2017	Il Dirigente 
Umberto Piccioni	
	Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2